관리번호

지역과 함께하는 교육(교육환경 개선)

5-1-④

공공 아동, 청소년 지원을 위한 문화공간 조성

주관부서

교육체육과 청소년팀, 도서관팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

청소년문화공간건립

1,002

10

50

2,600

2,579

누적 달성도(%)

20

30

50

80

100

□ 사업개요

○ 근거: 청소년활동진흥법 제11조(수련시설의 설치·운영 등)

○ 위치: 홍천읍 희망리 35

○ 규모: 1,987㎡(지하1층, 지상3층)

○ 기간: 2022. 1. ~ 2026. 8.

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	6,241	0	1,002	10	50	2,600	2,579
도 비	4,692	0	186	9	43	2,236	2,218
군 비	1,549	0	816	1	7	364	361

□ 추진실적

○ 청소년문화공간 사업계획서 사전검토 용역 시행: 2023. 1.

○ 홍천군 청소년문화공간 건립심의위원회 구성: 2023. 2.

○ 청소년문화공간 건립 4곳(대전, 양평, 부천, 충주) 벤치마킹: 2023. 4.

○ 공공건축 사업계획서 사전검토 신청: 2023. 5.

□ 향후 계획

○ 도비확보 관련 협의: 2024. 1. ~ 2024. 2.

○ 공공설계공모: 2024. 5. ~ 2024. 8.

○ 기본 및 실시설계: 2024. 9. ~ 2025. 4.

- 건축 인·허가 및 각종 예비인증 취득(BF인증, 제로에너지 등)

○ 시공사 선정 및 공사실시: 2025. 5.

○ 준공 및 개관: 2026. 5.