관리번호

지역과 함께하는 교육

5-2

홍천중학교, 석화초등학교 이전 추진

주관부서

교육체육과 교육정책팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

이전 학교수(개)

0

0

0

2

2

누적 달성도(%)

0

30

40

50

100

□ 사업개요

○ 홍천중학교 이전: 홍천읍 연봉리 333-1 일원(18,011㎡) / 사업비: 400억원

○ 석화초등학교 이전: 홍천읍 갈마곡리 539번지 일원(15,000㎡) / 사업비: 400억원

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0
도 비	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
민자 ․ 기타	0

※ 사업진행에 따라 교육청과 협의하여 재원책정

□ 추진실적

○ 학교 이전 TF팀 협의회 구성 및 운영 (3회 개최): 2022. 10.

○ 도교육감 면담 및 학교 이전 건의: 2023. 4.

○ 학교 이전 추진위원회 확대 구성 및 협의회 개최(4회 개최): 2023. 5. ~ 12.

○ 석화초등학교․홍천중학교 이전 지역주민 공청회 개최: 2023. 8. 31.

○ 학교 이전 설문조사 실시: 2023. 10. 25 ~ 11. 11

- 석화초 이전 찬성 85.7%

- 홍천중이전 찬성: 80.9%

- 홍천중 남녀공학 전환 찬성: 82.8%

□ 향후계획

○ 타당성 연구용역 및 교육환경평가 용역실시: 2024.4 ~ 2024. 8.

○ 이전계획 수립 및 지방재정투자심사: 2024. 8.

○ 학교용지 매입 및 착공: 2025. 1.

○ 학교이전 개교: 2028. 3.

※ 이전 추진의 필요성 및 타당성 홍보, 붐업조성

※ 강원도교육청 및 홍천교육지원청과 협업하여 이전 추진