관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_홍천읍 권역)

8-1

마지기~갈마곡 도로 개설

주관부서

도시교통과 도시시설팀

협조부서

도시교통과 도시기획팀

사업구분

중기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

도시계획도로(마지기~갈마곡간) 개설공사

실시설계

실시설계 및 각종 행정절차

보상협의 및

사업추진

사업추진

사업준공

누적 달성도(%)

10

30

50

80

100

□ 사업개요

○ 사 업 명: 도시계획도로(마지기~갈마곡간) 개설공사

○ 위    치: 홍천읍 마지기~갈마곡 일원

○ 사 업 량: 도로 개설 L=1.15km, B=15.0m(터널 포함 L=160m)

○ 총사업비: 220억원(※ 실시설계 완료 시 변동 가능)

○ 사업기간: 2022. 12. ~ 2026. 06.

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	22,000	0	400	400	11,600	8,000	1,600
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	22,000	0	400	400	11,600	8,000	1,600
민자 ․ 기타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

○ 2022. 12. 29.: 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

□ 향후 계획

○ 2024. 05월중 : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2024. 06월중 : 편입 토지 및 지장물 보상협의 완료

○ 2024. 07월중 : 공사 계약 및 착공

○ 2026. 06월중 : 공사 준공