관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_남면 권역)

8-20

시동 민‧군 체육시설 설치

주관부서

교육체육과 체육시설팀

협조부서

사업구분

중기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

남면 시동권역 생활체육공원 조성

군관리

계획결정실시설계용역

도비신청 및 사업착수 및 준공

누적 달성도(%)

10

50

100

□ 사업개요

○ 사업위치: 홍천군 남면 시동리 356번지 일원

○ 사업량: 생활체육공원 조성 1식(풋살장, 족구장, 테니스장 등)

○ 사업기간: 2022. 10.  ~ 2025. 12.

○ 총사업비:5,000백만원

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	5,000	0	0	1,170	0	3,830	0
국 비	0	0	0	0	0
도 비	3,250	0	0	0	0	3,250
군 비	1,750	0	0	1,170		580
민자 ․ 기타	0	0	0	0

□ 추진실적

○ 군관리계획 결정(변경) 고시: 2023. 11.

○ 실시설계용역 추진: 2023. 11.

□ 향후 계획

○ 편입토지 보상협의 추진 : 2024. 01. ~

○ 2024년 1회 추경 체육진흥시설 지원 도비 신청 및 강원특별자치도 방문: 2024. 3.

○ 각종 인허가 및 행정절차 이행: 2024. 5.~

○ 사업 착수 및 준공 : 2024. 9. ~ 2025. 12.

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음