관리번호			다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_서면 권역)
8-24			팔봉산 관광지 확대
주관부서		관광문화과 관광정책팀			협조부서
사업구분		장기			추진현황			정상추진
공약사항 확인지표	단위			연도별 실행 이행
				'22년		'23년	'24년		'25년	‘26년 이후
	팔봉산 관광지 활성화			조성계획		사전절차	조성사업		조성사업	조성사업
	누적 달성도(%)			20		30	40		50	100
□ 사업개요 ○ 추진목적: 노후 관광시설 개선 및 신규시설 도입을 통한 관광지 활성화 ○ 사업위치: 팔봉산 관광지 일원(서면 어유포리 산 255번지 일원) ○ 사업면적: (기정) 387,751㎡ → (변경) 498,656.8㎡(증 110,905.8㎡) ○ 추진기간: 2019. ~ 2035. ○ 총사업비: 134,649백만원 ※ 계획 사업비로 단계별(연차별) 추진 ○ 사업시행자: 홍천군수 ○ 사업내용: 관광지 지정면적 및 조성계획 변경 - (공공시설) 웰컴센터(관리사무실), 이벤트광장, 오수처리장, 주차장, 도로 등 - (상업시설) 저잣거리(기존 상가 대체시설), 농·특산물 판매장 등 - (체험시설) 출렁다리, 타워브릿지, 잔도, 글램핑장, 민물고기 체험장 등 □ 추진실적 ○ 팔봉산 관광지 조성계획(변경) 용역: 2020. 7. ~ 2022. 12. ○ 관광지 지정면적 및 조성계획 변경 승인 신청(郡→道): 2023. 3. 20. - 전략환경영향평가서(본안) 및 환경영향평가(변경) 협의 완료: 2023. 12. 1. □ 향후 계획 ○ 조성계획 변경 승인 신청 관계기관 협의 및 보완: 계속 - 문화체육관광부, 농림축산식품부, 강원특별자치도 ○ 관광지 조성사업 재원 확보 추진: 2024. ~ ○ 관광지 조성사업 시행 사전절차 이행(타당성 및 투자심사, 공유재산심의, 토지매입 등 ○ 관광지 조성사업 시행계획 수립 및 연차별 사업추진: 2024. ~ ○ 관광지 확장(지정면적 변경) 검토 및 추진(단계별·연차별 조성사업 추진 연계) □ 문제점 및 대책 ○ 지속적인 민원해결(소통 및 협의) 추진 - 팔봉산 관광지 상가 민원 / 신규 편입 토지 민원(사유재산권 침해 민원) ○ 조성사업 시행 사전절차 및 재원 확보 지난 ⇒ 지속적 협의 및 재원 확보 추진