관리번호

소통, 신속한 행정

1-4

도시재생사업 및 도시경관사업 추진

주관부서

도시교통과 도시재창조팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

일부추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

도시재생 활성화 지역

(6개소)

사업추진

사업추진

사업추진

사업추진

사업추진

누적 달성도(%)

20%

40%

60%

80%

100%

□ 사업개요

○ 사업목적: 원도심 공동화 및 상권 쇠퇴 등 문제점 해결을 통한 지역주민 삶의 질

개선과 지역활성화 도모

○ 대상지역: 도시재생 활성화지역(3개소)

- 홍천읍 신장대리, 진리, 희망리, 갈마곡리

○ 사업구분: 도시재생사업, 도시재생 예비사업, 도시재생 인정사업 등

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	50,384	900	4,651	10,780	3,538	9,979	20,536
국 비	20,000	900	3,100	4,750	2,275	2,775	6,200
도 비	2,000		380	495	227	316	582
군 비	27,384		1,171	5,535	1,036	6,888	12,754
민자 ․ 기타	1,000		0	0	0	0	1,000

□ 추진실적

◇ 신장대리 도시재생사업

○ ‘22. 1기,2기 / ‘23. 3기: 도시재생마을학교 운영

○ ‘22. 4개소 / ‘23. 5개소: 주민공모사업 추진

○ ‘24. 02.: 건강놀이터 조성사업 준공

○ ‘24. 05.: 집수리 지원사업 공사 준공(1개소)

○ ‘24. 06.: 녹색골목환경 개선사업 공사 준공

○ ‘24. 06.: 목재정원박람회 시범사업 시행

○ ‘24. 09.: 목재정원박람회 본 사업 시행

○ ‘24. 12.: 신장대리 도시재생 활성화계획 변경(중대한)

○ ‘25. 11.: 신장대리 도시재생 활성화계획 변경(경미한)

◇ 갈마곡리 도시재생 인정사업

○ ‘22. 07.: 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘22. 10.: 기존건축물 정밀안전진단 완료

○ ‘23. 05.: 설계의 경제성 등 검토(VE) 완료

○ ‘23. 12.: 인정사업계획 (변경) 고시

○ ‘23. 12.: 기본 및 실시설계용역 준공

○ ‘24. 04.: 우수유출저감대책 수립용역 준공

○ ‘24. 05.: 강원특별자치도 건설기술심의 완료

○ ‘24. 07.: 건축허가 완료

○ ‘24. 08.: 강원특별자치도 계약심사 완료

○ ‘24. 11.: 건축공사 착공

○ ‘25. 08.: 기타공사(전기·기계·통신·소방) 착공

◇ 진리·희망리 도시재생 사업(우리동네살리기)

○ ‘23. 09.: 24년 국토교통부 도시재생사업 신규 선정

○ ‘24. 03.: 뚝딱뚝딱 문화예술 콤플렉스 실시설계용역 착수

○ ‘25. 04.: 공영주차장 신축 및 어린이 광장조성 실시설계용역 착수

○ ‘25. 11.: 스마트 안전안심 학교가는길조성사업 준공

○ ‘25. 11.: 홍천군 우리동네살리기 실행계획변경

○ ‘25. 11.: 행복동행 집수리 지원사업 착공(1차)

○ ‘25. 12.: 행복동행 골목환경 개선사업 착공

□ 향후 계획

○ ‘22. 1. ~ ‘27. 12.: 신장대리 일원 도시재생사업 정상추진

○ ‘24. 11. ~ ‘27. 12.: 홍천 주민생활복합허브 조성사업 추진

○ ‘24. 1. ~ ‘27. 12.: 진리, 희망리 도시재생사업 정상추진

□ 문제점 및 대책

◇ 신장대리 도시재생사업

○ 문제점: 도시재생 활성화계획 변경 필요

- 그린어울림센터 내용변경

○ 대책: 국토교통부 협의하여 활성화계획 변경 승인

◇ 갈마곡리 도시재생 인정사업

○ 홍천소방서 이전 지연에 따른 홍천 주민생활복합허브 조성사업 원만한 사업추진에

어려움이 있어 홍천소방서 신축공사 조기준공 독려