관리번호

가치상승 홍천 경제

3-1-①

홍천국가항체클러스터 스케일 업

주관부서

미래성장추진단 첨단산업팀

협조부서

기획감사실

사업구분

중기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

홍천국가항체클러스터

스케일 업

계획수립, 공모사업 신청 및 선정

설계절차

이행

공사 추진

공사 추진 및 준공

시설 운영

누적 달성도(%)

20

30

□ 사업개요

○ 홍천국가항체클러스터 스케일 업

- 사업위치: 북방면 중화계리 165-1번지(홍천 도시첨단산업단지)

- 사업기간: 2022년 ~ 2027년

- 사 업 비: 575억원[한강수계기금 180, 지방소멸기금(광역) 100, 지방소멸기금 (기초) 135, 도비 36, 군비 124]

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	57,500	0	4,000	8,125	3,650	12,300	29,425
한강수계기금	18,000				600	6,000	11,400
지방소멸기금(광역)	10,000		1,600	2,100	1,400	2,080	2,820
지방소멸기금(기초)	13,500		2,000	4,000	1,000	500	6,000
도비	3,600				100	1,000	2,500
군비	12,400		400	2,025	550	2,720	6,705

□ 추진실적

○ 항체산업 비즈니스센터 건립

- 건축기획 용역 및 공공건축 시행: 2023. 5. ~ 10.

○ 종합지원센터 구축·운영

- 건축설계 공모 완료: 2023. 11.

○ 행복주택 건립

- 건축설계 공모 완료: 2023. 9.

- 기본 및 실시설계 용역 시행: 2023. 10. ~ 2024. 5.

○ 첨단바이오기업 입주 공간 조성

- 기존 건축물(4개동) 철거 완료: 2023. 10.

○ 개방형 공원 조성

- 일상감사(계약심사) 완료: 2023. 9.

- 공사 착공: 2023. 11. ~ 2024. 5.

○ 일자리 창출형 첨단산업 육성

- 1차년도 선정기업 현장모니터링 3분기 과제 점검: 2023. 11.

※ 6개 기업, 1개 연구기관, 3개 대학 선정

□ 향후 계획

○ 항체산업 비즈니스센터 건립

- 2024년 제1차 지방재정중앙투자사업 심사 추진: 2024. 1. ~ 3.

- 설계 공모, 기본 및 실시설계 용역 추진: 2024. 7. ~ 2025. 7.

- 센처 건축 공사: 2025. 8. ~ 2027. 6.

○ 종합지원센터 구축·운영

- 2024년 제1차 지방재정중앙투자사업 심사 추진: 2024. 1. ~ 3.

- 기본 및 실시설계 용역 추진: 2024. 7. ~ 2025. 7.

- 센터 신축 공사: 2025. 8. ~ 2027. 6.

- 종합지원센터 프로그램 기획·운영: 2027. 7.

○ 행복주택 건립

- 2024년 제1차 지방재정중앙투자사업 심사 추진: 2024. 1. ~ 3.

- 기본 및 실시설계 용역 추진: 2024. 7. ~ 2025. 7.

- 행복주택 건축 공사: 2025. 8. ~ 2027. 6.

○ 개방형 공원 조성

- 공사 준공 및 결산: 2024. 2. ~ 5.

○ 일자리 창출형 첨단산업 육성

- 2차년도 사업 과제 선정: 2024. 3. ~

- 2차년도 사업 연차 평가: 2024. 12.

□ 문제점 및 대책

○ 2024년 제1차 중앙투자심사 완료(3월말), 제1회 추경 편성 시 항체산업 비즈니스

센터 예산 확보 후 공사 추진