관리번호

가치상승 홍천 경제

3-3-①

농공단지 확대 조성

주관부서

경제진흥과 투자유치팀

협조부서

건설과, 도시교통과

사업구분

중기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

북방농공단지 조성

단지조성

기반시설

준공·분양

누적 달성도(%)

50

90

100

□ 사업개요

○ 북방농공단지 조성 신속 추진

- 조성위치: 북방면 상화계리 21번지 일원

- 조성면적: 101,081㎡(약3만평)

- 조성기간: 2015년 ~ 2025년

- 유치업종: 식료품제조업 등 7개 분야 16개 업체

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	17,200	8,500	4,000	4,000	700	0	0
국 비	8,000		4,000	4,000
도 비	0
군 비	9,200	8,500			700
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 북방농공단지 조성

- 지역소멸 대응기금 예산 80억 확보(2022년 40억, 2023년 40억)

- 북방 농공단지 조성공사(변경)실시설계 용역: 2022. 11. 25. ~ 2023. 3. 3.

- 부지조성사업 착공(토목공사): 2023. 6. 14. ~ 2025. 1. 29.

□ 향후 계획

○ 지적확정측량 성과검사(강원도) 요청: 2025. 1.

○ 북방농공단지 조성 공사 준공: 2025. 3.

○ 분양원가 농공단지 심의 위원 심의: 2025. 3.

○ 북방농공단지 분양 선정공고 및 계약체결: 2025. 6.

□ 문제점 및 대책

○ 농공단지 조성 후 분양가 조정으로 입주기업 호감도 및 경쟁력 확보