관리번호

지역과 함께하는 교육(교육환경 개선)

5-1-④

공공 아동, 청소년 지원을 위한 문화공간 조성

주관부서

교육체육과 청소년팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

청소년문화공간건립

790

9

200

4,890

3,790

누적 달성도(%)

20

30

50

80

100

□ 사업개요

○ 근  거: 청소년활동진흥법 제11조(수련시설의 설치·운영 등)

○ 위  치: 홍천읍 희망리 35

○ 사업비: 9,679백만원

○ 규  모: 1,526.9㎡(지하1층, 지상2층)

○ 기  간: 2022 ~ 2026

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	9,679	0	1,006	4,883	1,130	2,660	0
도 비	4,498	0	186	4,200	112
군 비	5,181	0	820	683	1,018	2660	0

□ 추진실적

○ 홍천군 청소년문화공간 건립심의위원회 구성: 2023. 2.

○ 청소년문화공간 사업계획서 사전검토 용역: 2023. 2. ~ 2023. 7.

○ 공공건축 심의: 2023. 7.

○ 일상감사 및 계약심사 완료: 2024. 5. 16

○ 기본 및 실시설계용역 시행 결의: 2024. 5. 16

○ 기본 및 실시설계 공모: 2024. 5. ~ 2024. 8.

○ 2024년 추경예산 확보: 2024. 9.

○ 지방재정투자 재심의 통과: 2025. 4.

○ 공유재산 심의 및 관리계획 승인 완료: 2025. 5.

○ 제로에너지 건축물 예비인증, 경관심의, 설계안정성검토 완료: 2025. 5.

○ 2025년 추경예산 확보: 2025. 5.

□ 향후 계획

○ 기본 및 실시설계 용역 완료: 2025. 6.

○ 행정절차(건축협의, 도 계약심사 등) 완료: 2025. 10.

○ 사업발주 및 착공: 2025. 11.

○ 준공 및 개관: 2026. 12.