관리번호

지역과 함께하는 교육

5-2

홍천중학교, 석화초등학교 이전 추진

주관부서

교육체육과 교육정책팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

이전 승인 학교수 및 노력도

0

0

0

2

2

누적 달성도(%)

10

30

50

100

100

□ 사업개요

○ 홍천중학교 이전: 홍천읍 연봉리 333-1 일원(18,011㎡) / 사업비 400억원

○ 석화초등학교 이전: 홍천읍 갈마곡리 539번지 일원(15,000㎡) / 사업비 400억원

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0
도 비	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
민자 ․ 기타	0

※ 사업진행에 따라 교육청과 협의하여 재원책정

□ 추진실적

《홍천군》

○ 학교이전 사전용역비 지원(교육경비): 2023. 9.

○ 석화초․홍천중 현 학교부지 활용계획 및 제안의견 조회(전 실과대상): 2024. 3.

○ 학교이전 추진 관련 강원도 교육감 면담: 2024. 4. 1.

○ 학교이전 업무지원계획 수립(현 학교부지 활용방안 발굴 및 매입계획 검토): 2024. 6.

○ 학교이전 추진 관련 강원도 교육감 면담: 2025. 1. 17.

《홍천교육지원청》

○ 석화초등학교․홍천중학교 이전 지역주민 공청회 개최: 2023. 8. 31.

○ 지역주민 및 교육공동체 대상 설문조사 용역실시: 2023. 10. 25. ~ 11. 11.

- 석화초 이전 찬성 85.7%, 홍천중이전 찬성: 80.9%, 남녀공학 전환 찬성: 82.8%

○ 학교이전 타당성 연구용역 실시: 2024. 8. ~ 12.

- ①석화초 갈마곡리 이전 ②남녀공학으로 홍천중 (화촌중,동화중 통폐합 포함) 연봉리 이전이 경제적 타당성이 가장 높은 것으로 분석

○ 학교이전 추진계획 수립: 2024. 12. ~ 2025. 3.

○ 석화초 이전 설립 추진단 구성 및 운영: 2025. 4. ~

□ 향후계획

《홍천군》

○ 현 학교부지 활용방안 지속적 발굴

○ 교육지원청과 협의하여 학교이전에 필요한 군 행정 업무지원

《홍천교육지원청》

○ 교육환경평가 용역실시: 2024. 10. ~ 2025. 10.

○ 학교이전 예정부지 교육환경보호위원회 심의: 2025. 1. ~ 10.

○ 홍천중 통합 이전 추진 위원회 구성 및 운영: 2025. 5. ~

○ 석화초 토지소유자 사업설명회: 2025년 상반기

○ 학교용지 매입: 2025. 6. ~ 2027. 8.

○ 설계용역: 2025. 6. ~ 2027. 8.

○ 공사추진: 2027. 9. ~ 2029. 11.

○ 학교이전 개교: 2030. 3. (예정)