관리번호			어디서나 즐기며 찾아오는 문화·관광
6 - 1			관광지의 과감한 투자와 활성화
주관부서		관광문화과 관광정책팀			협조부서
사업구분		장기			추진현황			일부추진
공약사항 확인지표	단위			연도별 실행 이행
				'22년		'23년	'24년		'25년	‘26년 이후
	팔봉산 관광지			조성계획		사전절차	사전절차		조성사업	조성사업
	누적 달성도(%)			10		15	20		40	100
	홍천온천 관광지			기본구상		기본계획	기본계획		사전절차	조성사업
	누적 달성도(%)			10		15	20		50	100
팔봉산 관광지 활성화 □ 사업개요 ○ 추진목적: 노후 관광시설 개선 및 신규시설 도입을 통한 관광지 활성화 ○ 사업위치: 팔봉산 관광지 일원(서면 어유포리 272 일원) ○ 사업면적: (기정) 387,751㎡ → (변경) 498,622㎡(증 110,871㎡) ○ 추진기간: 2020. ~ 2035. ○ 총사업비: 134,649백만원 ※ 계획 사업비로 단계별(연차별) 추진 ○ 사업시행자: 홍천군수 ○ 사업내용: 관광지 지정면적 및 조성계획 변경 - (공공시설) 웰컴센터(관리사무실), 이벤트광장, 오수처리장, 주차장, 도로 등 - (상업시설) 저잣거리(기존 상가 대체시설), 농·특산물 판매장 등 - (체험시설) 출렁다리, 타워브릿지, 글램핑장, 민물고기 체험장 등 □ 추진실적 ○ 팔봉산 관광지 조성계획(변경) 용역: 2020. 7. ~ 2022. 12. ○ 관광지 지정면적 및 조성계획 변경 승인 신청(郡→道): 2023. 3. 20. ○ 전략환경영향평가서(본안) 및 환경영향평가(변경) 협의 완료: 2023. 12. 1. ○ 재해영향평가 협의 완료: 2024. 8. 6. ○ 교통영향평가 심의 완료: 2024. 10. 30. ○ 경관위원회 심의 완료: 2024. 11. 14. □ 향후 계획 ○ 팔봉산 관광지 지정면적 및 조성계획 변경 승인 신청 관련기관 협의: 계속 - 문화체육관광부, 농림축산식품부, 강원특별자치도 ○ 관광지 조성사업 시행 사전절차 이행 - 타당성 및 투자심사, 공유재산심의, 토지매입 등 ○ 관광지 조성사업 시행계획 수립 및 연차별 사업추진 □ 문제점 및 대책 ○ 지속적인 민원해결(소통 및 협의) 추진 - 팔봉산 관광지 상가 민원 / 신규 편입 토지 민원(사유재산권 침해 민원) □ 홍천온천 관광지 활성화 □ 사업개요 ○ 추진목적: 최초 조성(개발) 이후 장기간 개발 정체된 홍천온천 관광지 활성화를 통한 지역 관광 및 경제 활성화 기여 ○ 사업위치: 홍천온천 관광지 일원(북방면 소매곡리 산35-5번지 일원) ○ 사업면적: 370,630㎡(A지구 193,867㎡, B지구 176,763㎡) ※ 지정: 1996. 9. 10. / 조성계획 승인: (최초) 1997. 8. 23. (최종변경) 2022. 10. 7. ○ 사업시행자: 홍천군수 □ 추진실적 ○ 홍천온천 관광지 토지주협의회 간담회 개최 - 토지주협의회 의견 교환 및 관광지 활성화를 위한 협의 등 ○ 온천장(스파지움) 조성사업 시행허가((주)올앤비): 2022. 10. ○ 홍천온천 관광지 활성화 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 완료: 2023. 5. ○ 사도 구간(홍천온천 관광지 입구 ~ 군도 14호선) 농어촌도로 기본계획 고시(홍천군 고시 제2024-355호 / 건설과): 2024. 8. □ 향후 계획 ○ 홍천온천 관광지 내 주도로 구간 토지 매입(6,000㎡ / B=12m, L=500m) ○ 관광지 조성사업 재원(공공, 민간) 및 투자자 확보 □ 문제점 및 대책 ○ 관광지 조성사업 시행을 위한 편입 토지 확보방안 마련(공공 또는 민간) ○ 지속적인 사업추진 동력 확보 ⇒ 재원 확보방안 마련(공공 또는 민간)