관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_홍천읍 권역)

8-1

마지기~갈마곡 도로 개설

주관부서

도시교통과 도시시설팀

협조부서

도시교통과 도시기획팀

사업구분

중기

추진현황

정상 추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

도시계획도로(마지기~갈마곡간) 개설공사

실시설계

실시설계

실시설계 및 각종 행정절차 추진

인허가 완료 및

토지 보상 추진

사업 착공 및 준공

누적 달성도(%)

10

20

40

60

100

□ 사업개요

○ 사 업 명: 도시계획도로(마지기~갈마곡간) 개설공사

○ 위    치: 홍천읍 마지기~갈마곡 일원

○ 사 업 량: 도로 개설 L=1.18km, B=15.0m(터널 포함 L=224m)

○ 총사업비: 345억원(※ 실시설계 완료 시 변동 가능)

○ 사업기간: 2022. 12. ~ 2028. 12.

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	34,500	0	400	400	0	3,200	30,500
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	34,500	0	400	400	0	3,200	30,500
민자 ․ 기타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

○ 기본 및 실시설게용역 착수           : 2022. 12. ~

○ 지반조사용역 완료                   : 2023. 10. ~ 2024. 11.

○ 측량용역 완료                       : 2023. 10. ~ 2024. 11.

○ 문화재 지표조사 용역 완료           : 2024. 02. ~ 2024. 05.

○ 설계안전성 검토 용역 완료           : 2024. 07. ~ 2024. 11.

○ 설계의 경제성검토(VE) 용역 완료     : 2024. 08. ~ 2024. 10.

○ 교통시설 안전진단(설계단계)용역 완료  : 2024. 08. ~ 2024. 12.

○ 군계획시설(도로) 결정 및 지형도면고시: 2025. 02. ~ 2025. 03.

○ 소규모 환경영향평가 완료            : 2025. 06.

○ 소규모 재해영향평가 완료            : 2025. 07.
○ 편입토지 분할 측량 및 감정평가      : 2025. 06. ~ 2025. 12.

□ 향후 계획

○ 지장물 보상 협의                                : 2025. 12. ~ 2026. 3.

○ 타당성 평가 준공                                : 2026. 02.

○ 건설기술 심의                                   : 2026. 03.

○ 기본 및 실시설계용역 완료 및 실시계획 인가 고시 : 2026. 05.

○ 공사 착공 및 준공                               : 2026. 07. ~ 2028. 12.