관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_서석면 권역)

8-14

지방도 408호선(무이~생곡간) 조기완공 및 선형개량(내촌IC~어론)추진

주관부서

건설과 도로관리팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

일부추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

지방도408호선(무이~생곡)조기완공 및 선형개량 (내촌IC~어론)추진

유관기관 협의

보상

보상

착공

사업추진

누적 달성도(%)

-

-

-

-

□ 사업개요

○ 노선명: 지방도408호선, 444호선

○ 위  치: 홍천군 서석면 생곡리~ 평창군 무이면 구간

홍천군 내촌면 물걸리~서석면 어론리 구간

○ 사업량: L=8.3km(무이~생곡) / L=9.4km(선형개량(내촌IC~어론))

○ 사업비: 2,521억원(무이~생곡) / 809억원(선형개량(내촌IC~어론))

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위: 백만원)
	계	기투자	2024	2025	2026	2027	2028이후
소 계	25,210	0	1,000	2,500	3,000	18,710	0
국 비	3,450		500	2,000		950
도 비	21,760		500	500	3,000	17,760
군 비	0
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ (무이~생곡간) 실시설계용역 착수: 2019. 6.

○ 무이~생곡간 주민설명회 개최: 2020. 7.

○ 무이~생곡간 환경영향평가, 설계VE 등 사전 행정절차 완료: 2023. 12.

○ 무이~생곡간 실시설계 완료: 2023. 12.

○ 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 반영: 2024. 11.

- 사업비 590억원(국비295억원, 도비295억원)

○ 지방도408호선(무이~생곡) 도로건설공사 입찰 공고: 2025. 11. 5.

□ 향후 계획

○ 지방도408호선(무이~생곡) 도로건설공사 착공: 2025. 12. (개찰일: ‘25. 12.16.)

○ 내촌 IC~어론 구간 실시설계비 반영되도록 건의

□ 문제점 및 대책

○ 지방도408호선(내촌IC~어론)구간은 강원도 도로건설관리계획 상 후순위에 해당되어 사업추진에 한계가 있으므로 의회와 연계하여 설계비 반영되도록 지속적인 건의