관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_남면 권역)

8-20

시동 민‧군 체육시설 설치

주관부서

교육체육과 체육시설팀

협조부서

남면

사업구분

중기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

남면 시동권역 생활체육공원 조성

군관리

계획결정 및 실시설계용역

도비신청

사업착공

사업준공

누적 달성도(%)

10

20

40

100

□ 사업개요

○ 사업위치: 홍천군 남면 시동리 356번지 일원

○ 사 업 량: 생활체육공원 조성 A=10,590㎡

- 세부시설: 풋살장 1개소, 족구장 1개소, 테니스장(1코트) 1동, 배드민턴장(4코트) 1동

○ 사업기간: 2022. 10.  ~ 2026. 6.

○ 총사업비: 5,210백만원

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	5,210	0	60	1,100	0	4,050	0
국 비	0
도 비	812.5					812.5
군 비	4,397.5		60	1,100	0	3,237.5
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 군관리계획 결정 및 지형도면 승인 고시              : 2023. 11.

○ 편입 물건 보상 추진 중                             : 2024. 1. ~ 2025. 11.

○ 소규모환경영향평가 용역 추진                       : 2024. 5. ~ 2024. 12.

○ 소규모재해영향평가 용역 추진                       : 2024. 7. ~ 2024. 12.

○ 실시계획인가(변경) 및 행정절차 진행                : 2024. 12. ~ 2025. 11.

○ 공사착공(토목)                                     : 2025. 7. ~ 2026. 6.

○ 체육진흥시설지원사업(전환사업, 도비) 확보(812.5백만원) : 2025. 8.

○ 공사착공(건축)                                     : 2025. 9. ~ 2026. 6.

□ 향후 계획

○ 사업 준공                                         : 2026. 6.