관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_남면 권역)

8-20

시동 민‧군 체육시설 설치

주관부서

교육체육과 체육시설팀

협조부서

남면

사업구분

중기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

남면 시동권역 생활체육공원 조성

군관리

계획결정 및 실시설계용역

도비신청

사업착수 및 준공

누적 달성도(%)

10

20

100

□ 사업개요

○ 사업위치: 홍천군 남면 시동리 356번지 일원

○ 사 업 량: 생활체육공원 조성 A=10,590㎡

- 세부시설: 풋살장 1개소, 족구장 1개소, 테니스장(1코트) 1동, 배드민턴장(3코트) 1동

○ 사업기간: 2022. 10.  ~ 2025. 12.

○ 총사업비: 6,310백만원

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	6,310	0	0	1,160	0	5,150	0
국 비	0
도 비	2,925					2,925
군 비	3,385			1,160		2,225
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 군관리계획 결정 및 지형도면 승인 고시: 2023.11.

○ 실시설계용역 추진: 2023.11. ~ 2025.01.

○ 편입 물건 보상 추진중: 2024.01. ~ 2025.01.

○ 소규모환경영향평가 용역 추진: 2024.05. ~ 2024.12.

○ 소규모재해영향평가 용역 추진: 2024.07. ~ 2024.12.

○ 2025년 본예산 체육진흥시설지원사업(전환사업, 도비) 확보(800백만원): 2025.01.

※2025년 제1회 추경 도비(2,125백만원) 편성예정

○ 실시계획인가 및 행정절차 진행: 2024.12. ~ 2025.02.

□ 향후 계획

○ 사업 착수 및 준공 : 2025. 3. ~ 2025. 12.