관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_남면 권역)

8-21

남면 일원 파크골프장 조성

주관부서

교육체육과 체육시설팀

협조부서

남면

사업구분

중기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

파크골프장 조성

사업대상지 선정 및 사업추진

누적 달성도(%)

20

100

□ 사업개요

○ 사업위치: 홍천군 남면 지역

○ 사업량: 파크골프장 9홀

○ 사업기간: 2022. 5.  ~ 2026. 7.

○ 총사업비: 1,000백만원

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	1,000	0	0	0	0	1,000	0
국 비	0
도 비	0
군 비	1,000					1,000
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 남면 고드래미 파크골프장 기본계획 수립 용역 추진: 2022. 5. ~ 2023. 2.

□ 문제점 및 대책

○ 남면 남노일리 고드래미 지역은 2022년 여름 집중호우로 사업대상지 유실로 제방설치 필요

○ 원주지방환경청의 홍천강 소매곡지구 하천정비사업에 포함되어 사업추진 중이나 2029년 사업완료 예정으로 신속한 사업추진 불가

○ 남면 행정복지센터와 협조하여 신규 사업대상지 선정 후 사업추진 할 계획임

□ 향후 계획

○ 사업대상지 선정 : 2025.1.~3.

○ 2025년 제1회 추경 사업비 편성 및 설계용역 추진 : 2025. 5.~6.

○ 사업 착공 및 준공 : 2025. 8 ~12.