관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_서면 권역)

8-22

널미재터널 조기완공

주관부서

건설과 도로관리팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

널미재터널 조기완공

유관기관

협의

보상

보상

착공

누적 달성도(%)

-

-

-

-

□ 사업개요

○ 노선명: 국지도86호선

○ 위  치: 홍천군 서면 동막리 ~ 가평군 설악면 위곡리 구간

○ 사업량: L=2.69km, B=10m(터널 1,735m/1개소, 교차로 2개소 포함)

○ 사업비: 648억 원

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위: 백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	1,589	800	589	0	200	0	0
국 비	1,589	800	589		200
도 비	0
군 비	0
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 토지보상비 추정 보고서 작성(한국부동산원): 2023. 2.~3.

○ 타당성 재조사 용역 발주(KDI): 2023. 2.~

○ 타당성 재조사(KDI) 관계자 현장 확인: 2023. 3. 3.

○ 원주지방국토관리청(도로계획과) 관계자 방문 협조 요청: 2023. 7. 27.

○ 타당성 재조사(KDI) 통과: 2024. 6. 5.

□ 향후 계획

○ 예산 확보 등 사업 조기착공 건의