관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_서면 권역)

8-25

오수처리장 시설확대(어유포리, 모곡1리, 팔봉1리)(서면)

주관부서

상하수도사업소 하수도팀

협조부서

상수도시설팀

사업구분

장기

추진현황

일부추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'23년

'24년

'25년

'26년

‘27년 이후

서면 어유포리

소규모 하수처리시설 설치

기본 및 실시설계

기본 및 실시설계

공사착공

공사진행

공사준공

누적 달성도(%)

10

30

55

80

100

□ 사업개요

○ 서면 어유포리 소규모하수처리시설 설치

- 위    치: 서면 어유포리 하수처리구역 내

- 사 업 량: 처리시설 100톤/일, 오수관로 7.17km, 배수설비 134개소

- 총사업비: 14,272백만원(국비 67.5%, 지방비 15.2%, 기금 17.3%)

- 사업기간: 2020 ~ 2028

○ 하수도정비기본계획 증설 및 통합 계획 반영 예정: 어유포리, 팔봉리, 구만리

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	14,272	314	0	753.2	2,171.4	143	10,890.4
국 비	9,628	220		2,99	2,000	100	7,009
도 비	791			25.6	171.4	8.6	585.4
군 비	1,377	37.6		428.6		34.4	876.4
기 금	2,476	56.4					2,419.6

□ 향후 계획

○ 2025. 6.: 재원협의 및 공공하수도 설치인가

○ 2025. 8.: 시설공사 발주, 조달청 공사원가 사전검토

○ 2025. 12.: 공공하수도 설치인가 및 시설공사 계약심사

○ 2026. 2.: 시설공사 계약 및 착공

○ 2028. 1.: 시설공사 준공(공사기간 24개월)