관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_서면 권역)

8-25

오수처리장 시설확대(어유포리, 모곡1리, 팔봉1리)(서면)

주관부서

상하수도사업소 하수도팀

협조부서

상수도시설팀

사업구분

장기

추진현황

일부추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

서면 어유포리 소규모

하수처리시설 설치

기본 및 실시설계

기본 및 실시설계

공사착공

공사진행

공사준공

누적 달성도(%)

10

30

55

80

100

□ 사업개요

○ 서면 어유포리 소규모하수처리시설 설치

- 위    치: 서면 어유포리 하수처리구역 내

- 사 업 량: 처리시설 100톤/일, 오수관로 7.17km, 배수설비 134개소

- 총사업비: 7,443백만원(국비 70%, 지방비 12%, 기금 18%)

- 사업기간: 2020 ~ 2026

○ 하수도정비기본계획 증설 및 통합 계획 반영 예정: 모곡1리․팔봉1리․되룡골

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	7,443	314	0	753.2	4,093	1,641.5	641.3
국 비	5,210	220		2,99	3,691	1,000
도 비	427.8			25.6	402	0.2
군 비	466.2	37.6		428.6
기 금	1,339	56.4				641.3	641.3

□ 향후 계획

○ 2024. 9.: 설계 경제성검토(VE)실시

○ 2025. 1.: 재원협의(총사업비 변경)

○ 2025. 6.: 사업 착공

○ 2027. 6.: 시운전 및 공사 준공

□ 문제점 및 대책