관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_북방면 권역)

8-26

부사원~본궁 터널 개설

주관부서

건설과 도로관리팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

부사원~본궁 터널 개설

기본설계

실시설계

실시설계

착공

사업추진

누적 달성도(%)

5%

50%

80%

-

-

□ 사업개요

○ 노선명: 군도4호선

○ 위  치: 홍천군 북방면 부사원리~본궁리 구간

○ 사업량: L=1.4km, B=8.0m(교차로 2개소, 터널 L=495m 포함)

○ 사업비: 250억 원(추정)

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위: 백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	25,000	0	100	400	300	2,500	21,700
국 비	0
도 비	0
군 비	25,000	0	100	400	300	2,500	21,700
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 기본 및 실시설계용역 업체 선정: 2022. 12. 22.

○ 지반조사용역 업체 선정: 2023. 3. 6.

○ 측량용역 업체 선정: 2023. 3. 9.

○ 노선(안) 계획보고: 2023. 3. 21.

○ 소규모환경영향평가, 소규모재해영향평가용역 시행 : 2024. 1. 18.

○ 교통시설안전진단 및 설계의 경제성등(VE) 검토 완료: 2024. 11.

○ 경관심의 완료: 2025. 4.

□ 향후 계획

○ 인허가 등 용역설계 마무리: 2025. 8.

○ 건설기술심의(강원특별자치도): 2025. 9.

○ 보상협의 및 사업추진: 2025. 10.~