관리번호

다함께 잘사는 홍천

8-31

자운2리 저수지 신설(괸돌)

주관부서

농정과 농업기반팀

협조부서

-

사업구분

장기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

괸돌지구 다목적 농촌용수개발사업

사업신청

(미선정)

사업승인

(기본조사)

사업승인

(시행계획)

설계 중

공사착공

누적 달성도(%)

-

100

100

100

100

□ 사업개요

○ 괸돌지구 중규모 농촌용수개발사업

- 저수지 1개소(L=145m, H=24m, 총저수량 696천톤), 용수로 16km 등

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	39,173	0	0	100	0	0	39,073
국 비	0
도 비	0
군 비	39,173			100			39,073
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 2023년 3월 27일 사업시행 기본조사지구 선정

○ 2023년 3회추경 저수지 건설에 따른 자운천 하천정비기본계획 변경 용역비     100백만원 농어촌공사에 위탁사업비로 지출

○ 세부설계 및 시행계획 승인 진행 중(~2024. 9.)

○ 시행계획 승인(2024. 12.)

○ 신규착수지구 선정(2025. 7. 16.)

□ 향후 계획

○ 인허가 협의, 사업인정 고시 및 토지보상(2026. 3.~ 2027. 3.)

○ 공사 시행 및 착공(2027. 6.)

○ 공사 준공(2030. 12.)

□ 문제점 및 대책

○ 정상 추진