관리번호

다함께 잘사는 홍천

8-31

자운2리 저수지 신설(괸돌)

주관부서

농정과 농업기반팀

협조부서

-

사업구분

중기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

괸돌지구 다목적 농촌용수개발사업

사업신청

(미선정)

사업승인

(기본조사)

사업승인

(시행계획)

설계

공사착공

누적 달성도(%)

100

100

□ 사업개요

○ 괸돌지구 다목적 농촌용수개발사업

- 저수지 1개소(L=145m, H=28m), 용수로 16km 등

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	100	0	0	100	0	0	0
국 비	0
도 비	0
군 비	100			100
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 사업시행 기본조사지구 선정: 2023. 3. 27.

○ 당초 수혜면적 203ha를 281ha로 변경 추진: 2024. 9. ~ 현재

※ 생태자연도 1등급 토지가 편입됨에 따라 환경부와 협의 중

○ 기본계획 승인: 2024. 12.

□ 향후 계획

○ 세부시행계획 승인(농림축산식품부 → 한국농어촌공사 → 도,군): 2026. 12.

○ 관련 인허가 및 행정절차 이행, 편입토지 보상: 2027. 1. ~ 2027. 12.

○ 공사착공: 2027. 6.

○ 공사준공: 2030. 12.