관리번호

다함께 잘사는 홍천

8-32

목욕탕, 헬스장 신축

주관부서

교육체육과 체육시설팀

협조부서

사업구분

단기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

내면 목욕탕, 헬스장 신축

사업 착공 및 준공

누적 달성도(%)

100

□ 사업개요

○ 사업위치: 홍천군 내면 창촌리 1603번지 일원

○ 사업량: 목욕탕 건립 A=350㎡(지상1층)

○ 사업기간: 2025.1..  ~ 2025.12.

○ 총사업비: 2,000백만원

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위:백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	2,000	0	0	0	0	2,000	0
국 비	0
도 비	0
군 비	2,000					2,000
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 2025년 본예산(실시설계용역비) 편성: 2025.1.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 추진: 2025.1. ~ 2025.3.

○ 지방재정 투자심사: 2025.3.

○ 건축협의 등 행정철자 진행: 2025.4.

○ 2025년 제1회 추경(공사비) 편성: 2025.5.

○ 공사 추진: 2025.5. ~ 2025.12.

○ 시설 관리전환(내면 행정복지센터) 및 운영: 2025.12.