관리번호

다함께 잘사는 홍천(읍면별 중점사업_화촌면 권역)

8-4

군업~장평간 선형개량 사업 조기 추진

주관부서

건설과 도로관리팀

협조부서

사업구분

장기

추진현황

정상추진

공약사항

확인지표

단위

연도별 실행 이행

'22년

'23년

'24년

'25년

‘26년 이후

군업~장평간 선형개량

사업 조기 추진

설계

설계

보상

협의

누적 달성도(%)

-

-

-

-

□ 사업개요

○ 노선명: 국도56호선

○ 위  치: 홍천군 화촌면 군업리~장평리 구간

○ 사업량: L=2.41km, B=11.5m(2차로 개량)

- 구조물: 교량 120m/4개소, 터널 320m/1개소

○ 사업비: 494억 원(추정)

□ 연도별 재원 투자 실적 및 계획

연도별 재원별	연도별 재원 투자실적 및 계획 (단위: 백만원)
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
소 계	1,542	0	0	200	712	630	0
국 비	1,542			200	712	630
도 비	0
군 비	0
민자 ․ 기타	0

□ 추진실적

○ 제5차 국도, 국지도 5개년 계획(‘21~’25) 에 반영: 2021. 9. 28.

○ 기본 및 실시설계용역 착수(원주지방국토관리청): 2023. 7. 12.

○ 주민설명회 개최(원주지방국토관리청): 2023. 12. 7.

○ 세부노선계획 수립: 2024. 4.

○ 환경영향평가, 설계VE 등 사전행정절차 이행: ~ 2024. 12.

○ 실시설계 예비준공 및 총사업비 협의: 2025. 6.

□ 향후 계획

○ 실시설계 완료 후 예산확보를 통한 조기착공 지속적 건의